[별첨 8] 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

GTI국제무역‧투자박람회

담당자

통상지원과 박나원

(☎249-2175)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동북아 지역 간 실질적인 경제협력 모델사업으로 개최․육성하여 북방경제

진출을 위한 실행력 주도권 확보 및 동북아 신흥시장 개척기지 기반 마련

□ 사업개요

○ 기 간 :  2013 ~ 2017년

○ 위 치 :  강릉시 실내종합체육관 일원(2013,2014)/ 속초시 엑스포공원 일원(2015)

○ 규 모 :  500개 기업, 바이어 3,100명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,895백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	7,895	1,550	1,995	2,150	2,200
국 비	3,600	900	900	900	900
도 비	4,295	650	1,095	1,250	1,300

□ 추진상황

○ 종합계획 수립 : 조직위원회 구성, 기업 및 참관객 모집, 세부행사 등

○ 시군 및 유관기관 업무 간담회, 홍보 브로셔(5개권 언어) 배부

○ 희망바이어 수요조사 및 국내 참가기업 모집 : 385개 기업

○ 박람회 행사 대행사 선정 및 행사계획 협의

□ 향후계획

○ 국내외 홍보 전개 : 방송, 신문, 인터넷, SNS 이벤트 등

○ 국내외 유력 바이어 발굴 및 1:1 매칭 : ‘15. 7~8월

○ 박람회 종합운영계획 수립 및 매뉴얼 작성 : ‘15. 8~9월

○ 쾌적하고 안전한 전시장 설치 및 박람회 개최 : ‘15. 10월

사업명

강릉 육상보조경기장 신축

담당자

전국체전운영과 전종구

(☎ 640-5968)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2015년 제96회 전국체육대회 개최에 따른 공인 육상보조경기장 없어 공인

육상경기규칙 제2조에 의거 주경기장으로부터 100미터 이내에 보조경기장 신설

○ 현 스쿼시 경기장(민간시설)은 관람석이 없으며 시설기준에 의거 관람석을

확보하여야 하나, 부지 협소하여 관람석 설치가 불가하며, 시설이 노후되고

협소하여 육상보조경기장 주변 가장자리에 신설

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 8월 ~ 2015년 12월

○ 위 치 : 육상보조경기장 - 강릉시 교동 산54-1번지일원

스쿼시경기장 - 강릉시 노암동 113번지일원

○ 규 모

- 400m 4레인, 120m 직선주로 6개, 필드(천연잔디:105m×68m)

- 휀스, 육상장비 창고, 화장실, 탈의실, 관람석 등 임시부대시설

- 스쿼시장 : 연면적 1,500㎡(지상1층), 코트 6면, 관람석 등 부대시설

- 토지보상 7필지, 분묘 등 지장물 보상 31개소 보상

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,350백만원                                  (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	8,324	1,122	1,868	5,334
국 비	1,662	1	86	1,575
도 비	1,555	1	147	1,407
시 군 비	5,107	1,120	1,635	2,352

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  87%)

○ 설계용역 : 2013. 8 ~ 2014. 9

○ 육상보조경기장 신설 : 2014.12. ~ 2015.8.

□ 향후계획

○ 공사추진 : 스쿼시경기장(2014. 12 ~ 2015. 12.)

사업명

원주기업도시 진입도로 개설공사

담당자

기업지원과 신승철

(☎ 249-2956)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지식기반형 연구·생산단지조성을 목적으로 정부정책사업으로 추진중인

원주기업도시를 잇는 기반시설(도로) 확충으로 성공적인 기업도시 정착

○ 원주 서북부 지역의 교통인프라 구축으로 지역발전 및 경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기    간 : 2012 ~ 2016년

○ 위    치 : 원주시 지정면 신평리~만종리

○ 사업규모 : 도로확포장 L=3.39㎞(B=20m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 65,211백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	65,211	36,050	7,028	14,322	7,811
도 비	65,211	36,050	7,028	14,322	7,811

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 사업부지 보상완료

○ 토공 작업 및 만종2교 설치 등 공사진행 60%

□ 향후계획

○ 시설공사 지속 추진(포장공, 부대공)

○ 2016년 6월 준공 예정

사업명

통리~신리간 도로확포장공사

담당자

도로철도과 권윤환

(☎ 249-3622)

□ 사업목적 및 필요성

○ 터널화․교량화를 통한 이동시간 단축으로 물류비용 절감

○ 위험 및 선형불량구간 구조개선으로 편리하고 안전한 도로건설

□ 사업개요

○ 기    간 : 2001~2016년

○ 위    치 : 태백시 황연동 통리 ~ 삼척시 도계읍 신리(지방도427호)

○ 시 공 사 : 한일건설 외 3개사

○ 사업규모 : 확포장 9.09km(터널 910m포함)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 110,858백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	110,858	95,155	5,000	4,500	6,203
도 비	110,858	95,155	5,000	4,500	6,203

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 92%)

○ 총524필지 458,887㎡중 503필지 454,854㎡ 보상협의 완료

○ 터널개통완료, 교량392m/6개소 완료

□ 향후계획

○ ‘15년 사업계획 연내 마무리 추진

사업명

강촌~창촌간 도로확포장공사

담당자

도로철도과 정원수

(☎ 249-2838 )

□ 사업목적 및 필요성

○ 국도46호선과 서울~춘천고속도로의 연계로 접근도로 확충

○ 선형불량구간 구조개선으로 강촌지역 관광산업과 국토균형발전에 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2009~2015년

○ 위    치 : 춘천시 남산면 강촌리 ~ 창촌리(지방도403호)

○ 시 공 사 : (주)금호산업 외 1개사

○ 사업규모 : 확포장 5.3km(교량 591m, 터널 134m 포함)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 85,989백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액		향 후 소 요 액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	85,989	32,980	6,774	6,500	39,735
도 비	85,989	32,980	6,774	6,500	39,735

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 총344필지 190,585㎡중 184필지 121,557㎡ 보상협의 완료

○ 교량 2개소/351m 완료, 토공 5.3km중 0.7km완료

□ 향후계획

○ ‘17년도까지 강촌우회도로 개통계획으로 추진

사업명

창촌~발산간

도로확포장공사

담당자

도로철도과 정원수

(☎ 249-3427)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지방도403호선(홍천~양구)중 춘천시 남산면과 남면 통과 구간을 확장

및 신설하여 주변지역의 원활한 소통을 위한 교통기반을 구축

○ 국도46호선과 서울~춘천고속도로의 연계로 접근도로 확충

□ 사업개요

○ 기    간 : 2005~2015년

○ 위    치 : 춘천시 남산면 창촌리 ~ 남면 후동리(지방도403호)

○ 시 공 사 : 에스에치건설(주)외 1개사

○ 사업규모 : 확포장 4.6km(교량 260m, 터널 750m 포함)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 65,459백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	65,459	51,759	5,800	7,900	-
도 비	65,459	51,759	5,800	7,900	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 터널 1개소/750m 완료, 보상협의 완료

○ 교량 7개소/260m 완료, 포장공(중간층) 4.6km중 3.8km 임시개통

□ 향후계획

○ ‘15년도까지 전체 개통계획으로 추진

사업명

금당~상안미간

도로확포장공사

담당자

도로철도과 유청담

(☎ 249-3623)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영동고속도로, 국도6호, 31호선과 동계올림픽개최지인 보광휘닉스파크와

연계되는 접근도로 확충

○ 위험 및 선형불량구간 도로 구조개선으로 편리하고 안전한 도로건설

□ 사업개요

○ 기    간 : 2005~2016년

○ 위    치 : 평창군 봉평면 유포리 ~ 대화면 개수리(지방도424호)

○ 시 공 사 : 삼능건설주식회사

○ 사업규모 : 확포장 8.14km(교량 4개소 390m 포함)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 61,368백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	61,368	33,791	4,700	5,000	17,877
도 비	61,368	33,791	4,700	5,000	17,877

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 67%)

○ 총248필지 168,614㎡중 218필지 157,512㎡ 보상협의 완료

○ 교량 3개소/380m 완료, 확포장 8.14km중 3.87km완료

□ 향후계획

○ ‘15년도까지 도로 5.45km 확포장하여 지역주민 교통편의 제공

사업명

문곡~창리간 도로확포장공사

담당자

도로철도과 권윤환

(☎ 249-3622)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국도31호선과 42호선을 연결하는 지방도415호선으로 접근도로 확충

○ 문곡~창리간 노폭협소,급경사, 굴곡부로 인한 교통사고 발생우려 및

동절기 결빙으로 통행이 불편한 구간에 대하여 최선의 방안강구 도로

이용의 편의를 도모하기 위함

□ 사업개요

○ 기    간 : 2010.5~2017.4

○ 위    치 : 영월군 북면 문곡리 ~ 평창군 미탄면 창리(지방도415호)

○ 시 공 사 : (주)한신공영 외 1개사

○ 사업규모 : 확․포장 L=13.24km(교량10개소/279m,터널1개소890m 포함)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 72,169백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	72,169	13,368	5,103	5,300	48,398
도 비	72,169	13,368	5,103	5,300	48,398

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 29%)

○ 총780필지384,192㎡중 124필지 82,401㎡ 보상협의 완료

○ 교량 1개소/62m 완료, 터널890m굴착및 라이닝콘크리트 완료

토공 12.35km중 0.5km완료

□ 향후계획

○ ‘16년도까지 밤재터널  개통계획으로 추진

사업명

지내~고성간(새밑고개) 도로확포장공사

담당자

도로철도과 백명렬

(☎ 249-2834)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지방도403호선 춘천~화천간 새밑고개 터널을 개설하여 기능을 향상함

○ 선형불량구간 구조개선으로 춘천~화천간의 지방도 연결기능을 향상하고

관광산업과 국토균형발전에 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2011~2016년

○ 위    치 : 춘천시 신북읍 지내리 ~ 사북면 고성리(지방도403호)

○ 시 공 사 : (주)태영건설

○ 사업규모 : 확포장 3.76km(교량 185m, 터널 2,110m포함), 재포장 2.14km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 52,739백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	52,739	10,589	7,726	5,400	29,024
도 비	52,739	10,589	7,726	5,400	29,024

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 38%)

○ 총125필지 58,224㎡중 97필지 52,630㎡ 보상협의 완료

○ 새밑터널 2,110m 굴진 완료후 공동구 설치중, 교량 2개소/145m 설치중

□ 향후계획

○ ‘15년도까지 새밑터널 라이닝1,200m/2,110m시공, 교량 2개소 거더 설치

사업명

동서녹색평화 도로(두타연)개설공사

담당자

도로철도과 유청담

(☎ 249-2838)

□ 사업목적 및 필요성

○ 굴곡부 선형개량 및 교량재가설로 접경지역과 주변관광지(두타연, 평화의 댐 등)

접근로 개설

○ 위험 및 선형불량구간 구조개선으로 편리하고 안전한 도로건설

□ 사업개요

○ 기    간 : 2013. 3. 25 ~ 2016. 3. 8

○ 위    치 : 양구군 방산면 송현리 ~ 고방산리(지방도460호)

○ 시 공 사 : 금광기업(주)외 2개사

○ 사업규모 : 도로개설 L=1.56km(터널 382m, 교량 170m/2개소 포함)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	20,000	7,040	6,492	4,008	2,460
국 비	14,000	4,928	4,544	2,806	1,722
도 비	6,000	2,112	1,948	1,202	738

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 실시설계 용역완료 : ‘11.11.26~’12.12.10

○ 공사계약심사 및 일상감사 : ‘12.12.17

○ 공사착수 : ‘13.3.25

○ 교량170m/2개소 상부슬라브, 터널 382m 굴착 및 라이닝

○ 비탈면 보강공 (기대기옹벽 1,803㎡)

□ 향후계획

○ 본선 포장

○ 전기공사, 각종 표지판 등

사업명

고성소방서 신축사업

담당자

소방행정과 정만수

(☎ 249-5123)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대형관광 숙박건물과 전국 최다 해변 보유로 소방수요 증가

○ 소방서 미설치 고성군민 상대적 소외감 해결 및 소방인프라강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 2. ~ 2015. 5.(준공)

○ 위 치 : 고성군 간성읍 신안리 170번지, 부지면적 9,321㎡

○ 규 모 : 철근콘크리트조 지상2층, 지하1층, 연면적 2,963.32㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  6,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14년도	‘15년도	‘16년도 이후
계	6,500	192	2,418	3,890
도 비	3,500	96	1,209	2,195
시 군 비	3,000	96	1,209	1,695

※ 총사업비 중 감리비 잔액 4,579,450원 발생(‘15년 정리추경 불용처리)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2015. 5. 4. 준공처리(건축, 전기, 통신, 소방공사, 건축감리, 전기감리, 통신감리)

○ 2015. 5. 11. 입주 / 2015. 5. 22. 준공식 개최

□ 향후계획

○ 해당 없음

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경 : 당초 5,500백만원 → 변경 6,500백만원(증1,000백만원)

- 연약지반, 군사보호 고도제한 등으로 건축면적 증가로 공사물량 증가

사업명

강릉소방서 신축사업

담당자

소방행정과 정만수

(☎ 249-5123)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도내 가장 노후되고 협소한 소방서(1980년. 35년 경과)로 신축 필요성

○ 2018 동계올림픽 대비 적정 소방인력, 장비 등 안전인프라 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 6. ~ 2016. 12.(준공예정)

○ 위 치 : 강릉시 홍제동 577번지 일원, 부지면적 35,593㎡

○ 규 모 : 철근콘크리트조 지상3층, 지하1층, 연면적 3,500㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  10,650백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14년도	‘15년도	‘16년도 이후
계	10,650	180	20	5,450	5,000
시 도 비	6,150	180	20	3,450	2,500
시군구비	4,500			2,000	2,500

※ ’13~14년도 집행액 : 사업지구 편입 사유지(잔여지, 공유지분) 매입비 외 관련비용

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ ‘14. 6. 27. 도시관리계획 변경결정(공공청사) 승인고시

○ ‘14. 6. 30. 도시관리계획 변경결정에 따른 지형도면 고시

○ ‘14. 12. 31. 실시계획인가

○ ’15. 3. 30. 부지조성공사 착공 / ’15. 4. 6. 건축 기본 및 실시설계 착수

□ 향후계획

○ 건축설계용역 준공납품 및 일상감사 및 계약심사 : ‘15. 9~10월

○ 건축공사 착공 및 준공 : ‘15. 10. ~ ‘16. 12월 이후

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경 : 당초 7,700백만원 → 변경 10,650백만원(증2,950백만원)

- 부지조성토목공사비 2,000백만원, 부지 정형화 사유지 매입비 950백만원

사업명

양양소방서 신축사업

담당자

소방행정과 신영섭

(☎ 249-5150)

□ 사업목적 및 필요성

○ 양양군 산업문화 관광기반 확충에 따른 소방수요의 급격한 증가

○ 소방서 미설치 양양군민 상대적 소외감 해결 및 소방인프라강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 11. ~ 2014. 12.(준공예정)

○ 위 치 : 양양군 양양읍 월리 329번지 외 4필지, 부지면적 8,403㎡

○ 규 모 : 철근콘크리트조 지상3층, 지하1층, 연면적 2,725㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  6,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	6,500		191	5,809	500
도 비	3,500		191	2,809	500
시 군 비	3,000			3,000

※ ’14년도 예산현액 1,500백만원 중 건축설계용역비 외 계속비 이월

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ ‘15. 3. 2. 공사착공 / ‘15. 3. 25. 기공식 개최

○ ‘15. 8월 현재 지상3층, 지하1층 콘크리트 구조체 공사완료

□ 향후계획

○ 신축부지 상호교환(도유지 ↔ 군유지) : ‘15. 11월 중

○ 동절기 공사중지 : ‘15. 12 ~ ‘16. 2월

○ 공사 준공 : ‘16. 5월 이후

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경 : 당초 5,500백만원 → 변경 6,500백만원(증1,000백만원)

- 빗물처리 및 에너지관련 법규강화, 건설공사 표준품셈 적용 단가 상승 등

사업명

도 체육회관건립

담당자

체육과 홍종현

(☎ 249-2798)

□ 사업목적 및 필요성

○ 체육행정 전담 사무공간 개선 및 선수 합숙소 운영으로강원체육 발전 도모

○ 강원도 3개체육회의 한 건물내 입주로 체육행정의 시너지 효과 기대

□ 사업개요

○ 위    치 : 강원도 춘천시 송암동 165번지외 11필지, (8,673㎡)

○ 규    모 : 지하1층/지상4층(건축 연면적 6,080㎡)

○ 사업기간 : ‘13. 1 ~ ’16. 6월

○ 사 업 비 : 17,245백만원(국비 11,855, 도비 5,390)

○ 시설내역 : 3개 체육회·가맹경기단체 사무실, 선수합숙소 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  17,245백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	17,245	1,500	7,000	8,745
국비	11,855		6,187	5,668
도비	5.390	1,500	813	3,077

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 도 체육회관 건축허가(12.26) 완료 및 공사착공 : ‘14.12.27

○ 절토부 3단 옹벽, 지열시스템 공사, 건물 PTE 설치 및 기초공사 완료

○ 건물 골조공사 추진중(35%)

□ 향후계획

○ 건축물 골조, 외부단열 및 마감공사        : ‘15. 8 ~ ’15. 12

○ 내부(건축, 전기, 통신, 기계설비)공사 마감  : ‘16. 4월

○ 주차장, 토목공사 완료 및 준공             : ‘16. 6월