[별첨8] 10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

강원연구원 청사 매입 사업

담당자

회계과 김남철

(☎033-249-2878)

□ 사업목적 및 필요성

○ 제한된 청사 안에서 새로운 조직신설로 기구·정원이 증가함에 따라 기존 청사건축물의 부족한 사무공간을 청사 주변 건축물을 임대하여 사무공간으로 활용함으로 사무공간 확충이 불가피한 상황임

○ 인근 강원연구원 건물 및 부지를 매입하여 사무공간 확보를 통한 민원인 불편 해소와 행정서비스의 질적 향상을 기하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 1월 ~ 2020년 12월(3년)

○ 위 치 : 강원도 춘천시 중앙로1가 9번지외 6필지

○ 규 모 : 지하2층 / 지상 6층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :   13,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	13,800	-	-	5,400	8,400
도 비	13,800	-	-	5,400	8,400

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  40%)

○ 매매계약 체결 : `18. 3.

○ 리모델링 설계용역 및 공사 완료(강원연구원 2~3층) : `18.6.

□ 향후계획

○ 2019. 3. 31. 2차 중도금(31.4억), 2020. 6. 30. 2차 중도금 납부(31.4억)

○ 2020. 7 ~ 9월 강원연구원 리모델링 공사 추진(24억)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

사업명

드림프로그램 운영

담당자

체육과 이해규

(☎033-249-3317)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동계스포츠 저개발국 청소년 초청 동계스포츠 훈련 제공

○ 전세계 동계스포츠 동반성장, 동계스포츠 인력양성

○ 2018 동계올림픽 참가국 확대, 2018 평창동계올림픽 홍보 및 동계올림픽 개최국 위상 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017.1.9.~1.21.(13일간)

○ 위 치 : 평창 알펜시아리조트, 강릉빙상경기장 일원 등

○ 규 모 : 40개국 170명(장애 7국 26명 포함)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,640백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	20,640	12,256	1,384	1,400	5,600
국 비	7,692	3,574	618	700	2,800
도 비	11,864	7,746	618	700	2,800
기 타	1,084	936	148	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2017 드림프로그램 개최 : 2017.1.9.~1.21.(13일간)

□ 향후계획

○ 2018 드림프로그램 실행계획 수립 : ‘18.8월

○ 초청 대상국 선정 및 참가자 확정 : ‘18.10월

○ 자원봉사자 모집 및 실행 매뉴얼 작성 : ‘18.11월

○ 2018 드림프로그램 운영 : ‘18. 12월

사업명

올림픽특구랜드마크 조성사업

담당자

올림픽시설과 김형국

(☎033-249-3259)

□ 사업목적 및 필요성

○ 올림픽특구 랜드마크(상징조형물) 건립에 따른 올림픽 개최도시의 위상 제고

○ 2018평창동계올림픽을 통한 세계적인 관광자원 창출

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2017. 7월 ~ 2018. 5월

○ 위    치 : 평창군 대관령면 용산리 알펜시아 내

○ 총사업비 : 4,001백만원(도비 100%)

○ 사 업 량 : 올림픽특구 랜드마크(상징조형물) 1점

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,001		4,001	0	0
도 비	4,001	0	4,001	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 올림픽특구 랜드마크 조성(상징조형물) 계획 수립 : 2017. 2.16

○ 올림픽특구 랜드마크 조성(상징조형물) 투융자심사 완료 : 2017. 3. 2

○ 올림픽특구 랜드마크 조성(상징조형물) 제안서 평가 : 2017. 7. 7

○ 올림픽특구 랜드마크 조성(상징조형물) 계약 : 2017. 7. 25

○ 올림픽특구 랜드마크 조성(상징조형물) 완료 : 2018. 5. 28

□ 향후계획

○ 올림픽특구 랜드마크(상징조형물) 유지관리 추진 : 계속

사업명

씨감자 생산 대체포장 조성

담당자

감자원종장 조남준

(☎033-610-8738)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동계올림픽 지구내 씨감자 생산포장 편입 대체토지 조성

- 편입50.7ha(망실18.8ha) ⇒ 대체토지조성53.8ha(망실18.1ha)

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2019년

○ 위 치 : 강원도 강릉시 왕산면 대기리 일원

○ 규 모 : 토지조성53.8ha(망실18.1ha)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,608백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	19,608	5,000	6,108	4,000	4,500
도 비	19,608	5,000	6,108	4,000	4,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2017년 대기2지구 협의보상 완료, 대기1지구 지반공사 및 망실조성공사 추진

○ 2018. 5월 대기1지구 공사준공

○ 2018. 3월 대기2지구 공사착공 및 현재 토공 공정율 30% 진행중

□ 향후계획

○ 2019년 부지조성공사 완료 및 망실하우스 설치

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

씨감자 산지유통 저장시설 확충

담당자

감자종자진흥원 임경수

(☎033-339-8834)

□ 사업목적 및 필요성

○ 씨감자 저장시설 확충을 통한 춘기공급 확대로 전국 감자 농가 안정적        소득보장

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2018년

○ 위 치 : 강원도 평창군 대관령면 차항리 29-5외 2필지

○ 규 모 : 씨감자 산지유통저장시설(2,379㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,600		1,500	3,100
국 비	1,500		750	750
도 비	3,100		750	2,350

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2017. 12. 8. 착공하여 토사처리 및 토목공사(96%완료) 진행중

○ 토사 처리 중 암반의 노출로 공사의 지연 발생

□ 향후계획

○ 암반제거 후 건축 기초 공사 및 기계, 전기, 소방, 항온항습설비 공사진행

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

동서녹색평화도로

(인제 서화지구) 개설공사

담당자

도로철도과 김규진

(☎033-249-3622)

□ 사업목적 및 필요성

○ 접경지역의 동·서간 횡적 중심교통망 확충 및 열악한 접근성 개선

○ 지역균형 발전을 통한 주민 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 위  치 : 인제군 서화면 서흥리 ~ 서화면 서화리 일원

○ 사업량 : 확포장 6.4㎞, 폭 10.0m(교량 5개소/77m)

○ 사업비 : 34,864백만원

○ 공사기간 : 2017. 11. 23 ~ 2022. 10. 27(금차:2017.11.23~2018.12.07)

○ 종합진도 : 전체 1.56%(금차분 31.25%) - `18년 06월말 기준

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 34,864백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	34,864	-		57	34,807
국 비	24,404	-		27	24,377
도 비	10,460	-		30	10,430

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1.56%)

○ 실시설계용역 추진 : ‘11.11. ~ ’14.12.

○ 주민설명회 2회 실시 : ‘12.06.27(서화면, 12사단) / ’12.07.27(서화면, 북면)

○ 지방건설기술심의 등 행정절차 이행완료 : ‘14.12.

○ 책임건설사업관리용역 착수 완료 : ‘17. 8. 7.

○ 시설공사 조달계약 완료 및 착수 : `17. 11. 30.

□ 향후계획

○ 토공 : 흙깍기 7,551㎥, 흙쌓기 1,099㎥, 사토 6,330㎥

○ 구조물공 : 보강토옹벽 L=105m, RC옹벽 L=107.45m

○ 부대공 : 가설사무실 1식 등

사업명

지방도415호선 신월∼여량간

도로 확․포장 공사

담당자

도로철도과 김규진

(☎033-249-3622)

□ 사업목적 및 필요성

○ 교통 단절구간 연결을 통하여 간선도로망과의 접근성 향상과 주민 소득

증대 등 사회기반시설 확충

○ 지방도415호선(정선∼연곡) 중 신월∼여량(전우재) 구간에 대하여 「강원도

도로정비기본계획(2011∼2020)」에 따라 도로 개설 추진

□ 사업개요

○ 위  치 : 정선군 정선읍 신월리~여량면 고양리 일원(지방도415호선)

○ 사업량 :  도로 확․포장 L=9.44㎞(B=10m, 2차로), 터널 0.8㎞

○ 사업비 : 47,100백만원

○ 공사기간 : 2019년 3월 ~

○ 종합진도 : 실시설계용역중

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 47,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	47,100	-	-	400	46,700
도 비	47,100	-	-	400	46,700

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1.56%)

○ 지방재정투자심사 및 중기지방재정계획 : `17. 8. ~12.

○ 실시설계용역 추진 : ‘18. 5. 30. ~ ’19. 1. 14.

□ 향후계획

○ 건설사업관리용역 및 공사 발주 : ‘19. 2.

사업명

원주소방서 청사 이전 신축

담당자

소방행정과 강구손

(☎033-249-5150)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후‧협소한 소방청사를 지역경관과 잘 조화되는 현대식으로 이전 신축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2019(4개년 계속비 사업)

○ 위 치 : 원주시 반곡동 산16-12번지 일원

○ 규 모 : 부지면적 17,264㎡, 철근콘크리트 3/1층 1동, 연면적 4,799.78㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	12,000	320	242	8,838	2,600
도 비	6,000	160	121	4,419	1,300
시 군 비	6,000	160	121	4,419	1,300

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 소방청사 이전 신축계획 : 2015.08.12.

○ 공유재산 관리계획 및 지방재정투자심사 : 2015.10.16.

○ 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2016.06.27. ~ 2017.12.13.

○ 공사 착공 및 준공 : 2018.03.21. ~ 2019.03.20.

□ 사업변경 내역

○ 당초 : 2016 ~ 2018(3개년 사업)

○ 변경 : 2016 ~ 2019(4개년 사업)

○ 사유 : 설계경제성검토 및 건설기술심의 등 사전 행정절차 이행 기간

소요로 사업기간 추가 필요하여 총 사업기간 조정

사업명

강릉소방서 청사 이전 신축

담당자

소방행정과 이재동

(☎033-249-5123)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도내 가장 노후‧협소한 청사를 현대식 소방청사로 이전 신축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2017(4개년 계속비 사업)

○ 위 치 : 강릉시 홍제동 577번지

○ 규 모 : 부지면적 16,532㎡, 철근콘크리트 3/1층 1동, 연면적 3,719㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,950백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	11,950	5,038	6,912
도 비	7,450	2,519	4,931
시 군 비	4,500	2,519	1,981

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 공유재산 관리계획 및 지방재정투자심사 : 2012.10.19.

○ 소방청사 신축계획 : 2013.11.03.

○ 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2015.03.30. ~ 2015.10.07.

○ 공사 착공 및 준공 :

□ 사업변경 내역

○ 당초 : 9,950백만원

○ 변경 : 11,950백만원

○ 사유 : 사업비 부족으로 2016년 제1회 추경 2,000백만원 증액

사업명

화천소방서 청사 신축

담당자

소방행정과 홍승완

(☎033-249-5385)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도내 균등한 소방서비스 제공을 위한 신설 소방서 청사 신축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2019(3개년 계속비 사업)

○ 위 치 : 화천군 하남면 위라리 380번지 외 5필지

○ 규 모 : 부지면적 9,277㎡, 철근콘크리트 3/1층 1동, 연면적 2,880.72㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	7,000		204	3,896	2,900
도 비	3,500		102	1,698	1,700
시 군 비	3,500		102	2,198	1,200

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

○ 소방청사 신축계획 : 2016.11.30.

○ 공유재산 관리계획 및 지방재정투자심사 : 2017.02. ~ 03.

○ 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2017.08.18. ~ 2018.02. 26.

○ 공사 착공 및 준공 : 2018.06.07. ~ 2019.06.06.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

농업기술원 이전조성사업

담당자

총무과 고병대

(☎033-248-6162)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현 기술원 주변 도시화 및 시험포장 도시계획도로 편입 → 청사이전 시급

○ 강원농업의 미래 100년을 위한 청사이전 및 농업연구·지도기반시설 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2022(8년)

○ 위 치 : 춘천 신북읍 3개리(산천리, 유포리, 발산리) 일원

○ 규 모 : 28㏊(청사 0.6, 연구·부대시설 3.3, 시험포장 등 24.1)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 66,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	66,000	5,112	12,660	9,000	39,228
국 비	6,000	-	-	2,000	4,000
도 비	60,000	5,112	12,660	7,000	35,228

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ ’14.10~’15.02 : 타당성 조사 및 지방재정 중앙 투자심사

○ ’15.03~’16.02 : 기본계획 수립(사전재해 및 전략환경영향평가, 문화재 조사 등)

○ ’16.03~’17.12 : 도시관리계획 결정, 실시계획 고시, 기본 및 실시설계

○ ’17.12~현 재 : 입찰공고, 시공사 선정, 공종별 공사계약 및 착수

□ 향후계획

○ ’18~’20 : 부지조성, 토목·건축공사, 시험연구포장 조성 등

○ ’21~’22 : 부대시설 및 조경공사, 시설준공, 사무실 이전 등

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	증·감	변경사유
총사업비	560억원	660억원	증 100억원(17.8%↑)	실시설계 용역결과 반영